6. 거창생태공원 조성사업

실 태		황강천변의 친환경 수변 생태공원 제공

추진방향		하수방류수의 습지유입 및 자연정화로 청정하천

사업개요

위    치 : 거창군 거창읍 양평리 1239-110번지

사업기간 : 2008. 2. ~ 2010. 9. 4

사업규모 : 29,975㎡ (잠자리동산, 인공습지, 탐방로 등 조성)

총사업비 : 2,358백만원 (국비1,000, 도비420, 군비500, 기금438)

(단위 : 백만원)

년도별	계	국 비			도 비	군 비	자 담 (기 금)
		국비	분권교부	균특회계
계	2,358			1,000	420	500	438
2010이전	1,642			602	301	301	438
2010	716			398	119	199

사업시공자

- 토목 :(주)대아건설 대표김진환 , 조경 :(주)미림조경 대표김정수

사업진행 현황

타당성조사 및 기본계획 수립용역 : 2006. 9.

사전환경성 검토 용역수행 잠정중단 : 2008. 8. 13～2009. 3. 31

- 과업수행 대상지 인근의 88고속국도 확장노선 미확정에 따른 대상지 변경 가능성에 대비하여 중단

실시설계 및 사전환경성 검토 이행 : 2009. 4.

사업착공 : 2009. 6. 24

조경시설물 공사 (부지조성 외 32종) : 2009. 6 ~ 12.

향후 추진계획

편의시설 설치 및 조경식재 : 2010. 5. ~ 2010. 7

준공(예정) : 2010. 9. 4.

조 감 도

위 치 도