12. 사과테마파크 조성사업

추진방향		거창 명품 사과를 주제로 한 한국 최고의 사과메카 육성

사업개요

사업기간 : 2005. 1. ~ 2011. 2월

사업위치

- 공원기능 : 거창읍 정장리 (53,590㎡)

- 체험기능 : 고제면 봉계리 (74,208㎡, 2009. 5. 4 준공)

사업내용

- 공원기능 : 사과관, 사과테마거리, 축제광장 등

- 체험기능 : 사과체험장, 학습장, 공원시설 등

사업기간 : 2005 ~ 2010년

사 업 비 : 7,700,000천원(균특2,080,000 도비570,403 군비5,049,597)

․체험시설 2,400,000천원,  공원시설 5,300,000천원

사업진행 현황

공통사항

- 경상남도 투.융자 심사  : ‘05. 5. 13.

- 기본계획 및 타당성 조사 : ‘05. 12. 26.

- 공유재산관리승인 : ‘07. 2. 12.

체험시설 : 고제면 봉계리

- 부지, 지장물, 묘지 등 보상완료(600백만원) : ‘07. 7월

- 농어촌관광휴양단지 지정 : ‘07. 8. 24.

- 농어촌관광휴양단지 개발사업계획 승인 : ‘07. 10. 24.

- 공사기간 : ‘08. 2. 15 ~ ’09. 4. 24 (14개월)

- 체험장 위탁관리 단체 지정 : ‘09. 3. 30.

- 공사완료 :  ‘09. 5. 4.

공원시설 : 거창읍 정장리 819-3번지 일원

- 공원조성계획수립 및 사전재해영향성검토 용역 : ‘07. 10. 26.

- 정장공원 조성사업 실시설계 용역 : ‘07. 12. 10.

- 정장근린공원 조성계획 결정 요청 : ‘08. 08. 13.

- 사전재해영향성검토 협의 완료 : ‘08. 10. 02.

- 정장근린공원 조성계획 결정 : ‘09. 3. 17.

- 도시계획시설 실시계획 인가 신청 : ‘09. 09. 11.

- 정장근린공원 조성계획 변경 결정요청 : ‘09. 10. 14.

- 문화재 2차 시굴조사 완료 : ‘09. 12. 12.

- 1차 공사 착공(토목, 건축, 조경 ) : '09. 12. 30.

- 공원부지내 분묘 및 폐기물 처리 : 2010. 5월

- 2차공사 발주 : 전기, 통신, 소방, 설비공사 : 2010. 6월

- 사과관 전시시설 설계용역 : 2010. 6월

향후 추진계획

공원기능 : 거창읍 정장리

- 사과관 전시시설 실시설계 (‘10. 7월 ~ 9월)

- 사과관 전시시설 자료수집 및 설치 (‘10. 7월 ~ 11월)

- 공사준공 : 2011. 2월(공사기간 : ‘09. 12. 30 ~ 2011. 2. 22)

체험시설 안내도