13. 소도읍 육성사업

실 태		도심지 교통체증해소를 위한 교통량 분산

추진방향		邑을 경제,사회,문화적 거점기능을 갖춘 중추 소도시육성

사업개요

위    치 : 경상남도 거창군 거창읍 일원

사업기간 : 2008년 ~ 2012년

사업규모 : 강남시가지정비 외 2개영역에 8개 단위사업

총사업비 : 25,220백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	2010년까지	2011년	2012년 이후	비 고
계	25,220	22,200	2,020	1,000
국 비	5,350	5,350	-	-
도 비	5,000	5,000	-	-
군 비	14,870	11,850	2,020	1,000
민 자	-	-	-	-

사업시행자 : 원광건설 (주) 대표이사 조성제

사업진행 현황

‘07. 01. 26 : 거창읍 소도읍육성사업 기본 및 실시설계용역 발주

‘07. 07. 03 ~ ‘07. 08. 13 : 1차용역 기본안 검토결정 및 관련부서 협의

‘07. 11. 20 : 소도읍육성사업 기본 및 실시설계 용역 완료

‘08. 02. 25 ~ ‘09. 10. 25 : 강남시가지정비사업 편입부지(송정리) 보상완료

‘08. 08. 18 : 소도읍육성(강남시가지 정비공사) 착공

‘09. 05. 06 : 상림리 접속도로 도시계획시설결정 - 교량위치확정

‘10. 06. 02 ~ : 상림리 접속도로 보상협의 추진

‘11. 07. 01 : 상림리 접속도로 정비공사 발주

‘11. 08. : 송정접속도로 도로연결허가 완료

‘11. 12. : 소도읍육성(강남시가지 정비공사) 공사완료

조 감 도

위 치 도