3. 거창승강기 전문 농공단지 조성

실 태		산업용지 부족으로 기업유치 애로

추진방향		승강기 관련 업체 유치를 통한 전문화된 농공단지 조성

사업개요

위    치 : 거창군 남상면 월평리, 대산리 일원

사업기간 : 2009년 ~ 2014년

사업규모 : 320,280㎡ / 분양 200,064㎡

총사업비 : 29,900백만원 (국비 6,882, 도비 484, 군비 1,455, 지방채 등 21,079)

(단위 : 백만원)

구 분	소요예산(백만원)					비 고
	계	2010까지	2011	2012	2013이후
계	29,900	2,165	1,848	5,100	20,787
국 비	6,882	600	1,500	100	4,682
도 비	484	110	348	-	26
군 비	1,455	1,455	-	-	-
자부담(지방채 등)	21,079	-	-	5,000	16,079

사업시행자 : 공영개발(거창군수) ⇒ 실수요자 추진으로 변경 추진 중

유 치  업 종 : 기타 기계 및 장비 제조업(C29), 전자부품⋅컴퓨터⋅영상⋅음향 및 통신장비 제조업(C26), 전기장비제조업(C28)

사업진행 현황

‘09. 05. 20 : 국비지원 사업 선정(농림수산식품부)

‘09. 10. 27 : 지방재정 투융자 중앙심사(적정)

‘10. 03. 11 : 산업(농공)단지계획심의위원회 심의

‘10. 12. 07 : 지구지정⋅실시설계용역 완료

‘11. 08. 19 : 사업인가 고시 (거창군 제2011-60호)

‘11. 12. ~ 현재 : 손실보상 협의 추진 중(보상금지급 89.7%진행)

‘12. 03. 28 : 문화재 시굴조사용역 착수

‘12. 04. 09 : 실시설계 VE반영 및 단가보완 완료

‘12. 04. 16 : 매장문화재발굴허가(문화재청 제2012-0276호)

‘12. 05. 11 : 사업시행자 공모(1차)

‘12. 06. 18 : 매장문화재 발굴 완료인가(문화재청)

‘12. 06. 21  : 사업시행자 공모(2차)

‘12. 07. 23  : 사업제안서 접수

‘12. 07. 31  : 사업제안서 평가

‘12. 09.     : 협상완료 및 사업시행자 변경

‘12. 10.     : 사업 착공

‘14. 06.     : 사업 준공 및 정산

보상협의 현황

구분	계획			지급			지급율 (%)	비고
	필지수 (건수)	면적 (㎡)	금액(천원)	필지수 (건수)	면적 (㎡)	금액(천원)
계	528	326,275	7,412,479	368	298,172	7,113,334	93.6
토 지	127	326,275	4,951,020	95	298,172	4,997,191	97.3
영 농	73		244,928	73		244,928	100
지장물	50		1,364,705	47		1,357,852	99.5
분 묘	278		851,826	153		513,363	60.3

조 감 도

위 치 도