생활폐기물소각처리시설 설치사업

❖ 사업목적

○ 쓰레기 발생 처리의 자원화, 최소화, 단계별 처리체계 구축으로 위생적이고 안정적인 처리도모(발생 → 재활용 → 소각 → 매립)

○ 자원회수시설 설치로 에너지 절감 도모 ⇒ 실내수영장 온수 활용

❖ 사업기간   2006년 4월 ~ 2007년 12월

❖ 사업규모

○ 위    치 : 거창군 거창읍 양평리 1239-50

○ 소각용량 : 30톤/일

○ 소각방식 : 열분해방식

○ 사 업 비

구 분	계	국 비	시 군 비	비 고
재원별	7,371	2,206	5,165

단위 : 백만원)

❖ 추진 상황

○ 거창군폐기물처리시설 타당성 및 환경성 조사 실시 : 2004. 7

○ 기술공모지침서 작성 등 조사 용역 : 2005. 3

○ ‘05 공유재산관리계획변경에 따른 의회승인 : 2005. 3. 31

○ 사업자 선정 : 2005. 11 (건설기술공모)

○ 실시설계 및 심사 : 2006. 2

○ 공사착공 : 2006. 4. 17 (진도종건 + 화성종건)

○ 시운전 : 2007. 7 ~ 12월

❖ 사업효과

○폐기물처리의 단계별 처리체계 구축 (재활용 → 소각 → 매립)

○ 쓰레기 감량화로 매립시설 사용기간 연장

❖ 소각처리시설 조감도