거점산지유통센터 건립

❖ 사업목적

○ 과실주산지역에 규모화․현대화된 산지유통시설(APC)을 지원  하여 기존 유통시설의 중심축(HUB)으로 육성

○ 농산물 물류효율화와 규모화로 유통체계 개선 및 물류비용 절감

❖ 사업기간   2006년  1월 ~ 2008년 8월(2년 7개월)

❖ 사업규모

○ 위    치 : 거창군 거창읍 대평리 1347번지 일원

○ 건    평 : 1,283㎡

○ 부지면적 : 60,319㎡, 조성면적 40,319㎡

○ 건축전용면적 : 7,308㎡

○ 선별시설 : 50톤/일, 자유이송접시식, 투과광측정방식

○ 사 업 비 : 17,889백만원(도비7,750 도비3,100 군비7,039)

구 분	계	국 비	도 비	군 비	비 고
합 계	17,889	7,750	3,100	7,039
사 업 비	15,500	7,750	3,100	4,650
부지매입	2,389			2,389

(단위 : 백만원)

❖ 추진 상황

○ 대상부지 토지보상 완료 : 2006. 4 ~ 2007. 5

○ 거점APC 사업추진 잠정중단 지시(농림부) : 2007. 2. 21

○ 거점APC 향후 추진계획 협의(농림부) : 2007. 2. 22

○ 거창군수 농림부방문(농산유통국장 면담) : 2007. 2. 26

○ 「거점APC 보완대책」추진계획 수립 : 2007. 3. 5

○ 거점APC 보완대책 추진 간담회(군수) : 2007. 4. 5

○ 거점APC 농업회사법인 발기인회 : 2007. 5. 9

○ 거점APC 보완대책 세부시행계획 제출 : 2007. 5. 15

○ 농업회사법인 (주)NH유통 창립총회 : 2007. 5. 21

○ 농업회사법인 (주)NH유통 대표이사 취임 : 2007. 6. 1

○ 거점APC 사업비 확정(변경)통보 : 2007. 6. 8

○ 거점APC 정상추진 협의회 : 2007. 6. 13

○ 거점APC 사업추진 농림부 방문 : 2007. 6. 21

○ 거점APC 입찰안내서 수정보완 회의 : 2007. 7. 5

○ 거점APC 입찰안내서 수정보완 2차 회의 : 2007. 7. 19

❖ 향후계획

○ 거점 APC 건립 시설공사 계약위탁(조달청) : 2007. 8.

○ 거점 APC 기본설계실시 : 2007. 9 ~ 10

○ 거점 APC 기본설계기술심의 및 낙찰자결정 : 2007. 11

○ 거점 APC 우선시공분(Fast-Track) 기초공사(착공) : 2007. 11

○ 거점 APC 준공 : 2008. 8