거창스포츠파크 조성사업

❖ 사업목적

○ 군민의 스포츠 욕구 충족과 삶의 질 향상을 위하여 공설운동장 주변 일대를 웰빙형 스포츠메카로 조성

❖ 사업기간

○ 2005년 ~ 2009년

❖ 사업규모

○ 위    치 : 거창군 거창읍 양평리 공설운동장 일대

○ 사 업 량 : 공설운동장 신축 및 주변 체육시설ㆍ공원 조성

○ 부지면적 : 98,813㎡

○ 사 업 비 : 325억원

(단위 : 백만원)

구 분	계	기확보	2008년	2009년 이후	비 고
계	32,500	20,000	6,958	5,542
국 비	14,458	7,000	3,958	3,500
도 비	7,246	4,625	1,600	1,021
군 비	10,796	8,375	1,400	1,021

❖ 추진상황

○ 2005. 4월 ~ 2006. 1월 : 대형공사 건설기술심의 및 입찰

○ 2006. 3월 : 시설공사 착공

○ 2006. 3월 ~ 5월 : 공통가설공사

○ 2006. 4월 ~ 6월 : 수목이식 및 철거공사

○ 2006. 5월 ~ 2007. 2월 : 기반조성(성토, 상하수도 등) 공사, 본부석 기초 및 1층 골조공사 등

○ 2007. 3월 ~ 7월 : 본부석 2․3층 골조공사, 일반석 스탠드 골조공사, 조명탑․성화대 철골공사, 우․오수 관로매설 공사 등

○ 2007. 8월 ~ 2008. 7월 : 본부석 창호 및 내부마감공사, 주․보조경기장 포장 및 마감공사, 주변 체육 및 조경시설공사 등

❖ 추진계획

○ 2008. 8월 ~ 2009. 2월 : 본부석 및 주․보조 경기장 완료

○ 2008. 3월 ~ 2009. 9월 : 체육시설 및 부대시설 완료

○ 2009. 12월 : 사업완료 예정

❖ 사업효과

○ 스포츠 인프라 확충으로 체육발전 도모와 삶의 질 향상에 기여

○ 건강한 삶을 추구하는 현대인들의 스포츠 욕구 충족시켜주는 시설을 갖춤으로서 거창으로의 인구 유입을 유도

❖ 현장사진

❖ 조 감 도