생활폐기물소각시설 설치사업

❖ 사업목적

○ 쓰레기 발생 처리의 자원화, 최소화, 단계별 처리체계 구축으로 위생적이고 안정적인 처리도모

❖ 사업기간

○ 2004년 ~ 2007년

❖ 사업규모

○ 위    치 : 거창읍 양평리 1239-50번지

○ 사 업 량

┌ 면    적 : 5,450 ㎡(건축면적 : 3층 960.5㎡)

└ 소각용량 : 30톤/일 (1,250kg/hr)

○ 사 업 비 : 7,895백만원(국고 2,206백만원,군비5,689백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기확보	2007년	2008년	비 고
계	7,895	4,330	3,565	-
국 비	2,206	1,260	946	-
군 비	5,689	3,070	2,619	-

❖ 추진상황

○ 거창군폐기물처리시설 타당성 및 환경성 조사 실시 : 2004. 7

○ 기술공모지침서 작성 등 조사 용역 : 2005. 3

○ ‘05 공유재산관리계획변경에 따른 의회승인 : ’05. 3. 31

○ 사업자 선정 : 2005. 11  (건설기술공모)

○ 실시설계 및 심사 : 2006. 2

○ 공사착공 : 2006. 4. 17 (진도종건 + 화성종건)

○ 소각시설 시운전 실시 : 2007. 7 ~ 12 (6개월)

○ 소각시설 준공 : 2007. 12. 23

❖ 사업효과

○ 생활폐기물의 안정적 처리

○ 소각으로 발생되는 열원을 회수하여 에너지 순환 시스템 구축

❖ 조 감 도