월성권역 농촌마을종합개발사업

❖ 사업목적

□ 농촌마을 경관개선, 생활환경정비 및 주민소득기반 확충

등을 통해 살고 싶고 찾고 싶은 농촌정주여건 조성

❖ 사업기간

□ 2007년 ~ 2011년(5년간)

❖ 사업규모

□ 위    치 : 북상면 월성리외 4개리 7개마을/866명(404호)

□ 사 업 량 : 문화복지, 경관, 관광, 생태, 주민교육 등

- 면   적 : 94.59㎢(농지 5.17, 임야 89.04, 기타 0.38)

□ 사 업 비 : 6,994백만원(국비 80%, 도비 10%, 군비 10%)

- 연차별 사업계획

(단위 : 백만원)

계	2007년까지	2008년	2009년 이후	비 고
6,994	394	1,500	5,100

❖ 추진상황

□ 대상지 신청........................................................... 2005.  1월

□ 타당성 조사(농림부)............................................ 2005.  5~ 7월

□ 기본계획수립용역(농림부).................................. 2005.  8~12월

□ 기본계획 수립완료............................................... 2006.  3월

□ 기본계획 승인....................................................... 2006. 12월

□ 한국농촌공사와 일괄위탁계약........................... 2007.  5월

□ 설계용역 착수....................................................... 2007.  6월

□ 설계완료.................................................................. 2007. 11월

□ 설계승인(경남도)................................................... 2007. 11월

□ 공사입찰.................................................................. 2007. 12월

□ 착    공.................................................................. 2008.  3월

❖ 사업효과

□ 주민소득 기반 확충과 소득증대 기여

□ 경관개선, 생활환경정비로 농촌정주여건 조성

❖ 조 감 도