거창읍 소도읍육성 사업

❖ 사업목적

○ 청정환경속의 특화산업 전략을 살린 apple valley, 국제연극도시기반구축

○ 지역 정주기반의 확충으로 경쟁력제고 및 지역경제 활력화 도모

❖ 사업기간

○ 2006년 ~ 2009년(4년간)

❖ 사업규모

○ 위    치 : 거창군 김천리,송정리,상림리일원

○ 사 업 량 : 강남시가지정비외 2개분야(8개단위사업)

○ 사 업 비 : 277억원(균특 50,  도비30, 군비157, 기타40)

※ 군비 (교부세 50억 포함)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기확보	2008년	2009년 이후	비 고
계	27,700	7,600	8,150	11,950
국 비	5,000	650	850	3,500
도 비	3,000	1,000	1,000	1,000
군 비	15,700	5,050	6,300	4,350
기 타	4,000	900		3,100

❖ 추진상황

○ '02. 12. 10 : 거창읍 소도읍육성사업 추진기획단 구성

○ '03. 10. 15 : 거창읍 소도읍육성사업 주민공청회 개최

○ '05. 07. 07 : '05년 거창읍소도읍육성사업 제안서 제출

○ '05. 07. 20 : '05년 거창읍 소도읍육성사업 공모계획접수(군⇒도)

○ '05. 08. 20 : 대상 거창읍 소도읍육성사업 추천(도⇒행자부)

○ ‘05. 10. 26 : 2006년 소도읍육성사업 대상군으로 선정

○ ‘06. 02. 17 : 소도읍육성사업 협약 체결(행자부 ․ 경상남도 ․거창군)

○ ‘06. 05. 08 : 중앙 투자심사 완료 (적정)

○ ‘06. 08. 30 : 아비뇽공원 조성부지 토지 및 지장물 보상완료

- 토지(김천리 363-4번지외 6필지)

- 지장물(김천리 361번지외 4건)

○ ‘06. 09. 08 : 국고보조금 및 군비 1회 추경시 용역비 8억 확보

○ ‘06. 11. 16 : 용역(PQ)사업수행 능력평가서 심사 의뢰

○ ‘06. 11. 28 : 거창읍 소도읍육성사업 기본 및 실시설계용역 조달청 의뢰

○ ‘07. 01. 26 : 거창읍 소도읍육성사업 용역 발주

○ ‘07. 06. 10 : 사과테마파크 조성 공사 편입부비 감정의뢰(가람․삼창․중앙)

- 토지 136필지 (119,043㎡)

- 지장물 : 대평리769-1번지외 24필지 묘지(430기)

정장리 416번지 주택외 (65종)

○ ‘07. 07. 03 : 소도읍육성사업 1차 용역 기본안 검토

○ ‘07. 07. 26 : 사과테마파크 편입부지 감정결과 회신

○ ‘07. 08. 13 : 용역 기본안 결정 및 관계부서 협의

○ ‘07. 08. 16 : 사과테마파크 편입부지 개인별 보상 계획 수립

○ ‘07. 09. 17 : 사과테마파크 편입부지 보상금 개별통지 및 지급

⇒ 보상협의간 : 2007.09.03 ~ 2007.10.23(2개월간)

○ ‘07. 09. 17 : 거창군 계획위원회 개최 ⇒ 의견 반영

○ ‘07. 10. 15 : 강남시가지 정비 편입부지 보상 감정 의뢰

○ ‘07. 11. 10 : 국제연극문화타운 편입부지 보상협의

- 토지 : 장팔리 7번지외 1필지(2,839㎡)

- 지장물 : 장팔리 7번지 주택외 15종

○ ‘07. 11. 20 : 거창읍 소도읍육성사업 기본 및 실시설계용역 완료

○ ‘08. 02. 25 : 강남시가지정비 사업 편입부지 보상금 개별통지 및 지급

- 토지 송정리 184-20번지외37필지 (3,975㎡)

- 지장물 : 송정리 229-1번지 주택외 279건

○ ‘08. 05.  : 사업시행을 위한 관련부서 협의 완료

○ ‘08. 06  : 공람공고 및 실시계획인가 고시

○ ;08. 07  : 사업발주(강남시가지 정비 사업)

- 교량 : L=100m , B=20m

- 접속도로 L=481m , B=20m

❖ 사업효과

□ 지역균형 개발 차원에서 낙후된 강남지역 개발

□ 특화산업 육성 및 국제연극제 개최도시로서의 문화인프라 확충

□ 지역중심도시 기능의 강화

□ 문화 및 산업이 결합된 지식산업도시로의 위상 정립

❖위치도 및 전경 사진

시월교 및 접속도로 건설

버스터미널 이전통합

KIFT문화거리 조성

아비뇽 공원조성

웅곡천생태하천의 정비

사과테마파크 및

사과실험장(고제면)

국제연극문화센터의 건립

시월교 및 접속도로 건설		웅곡천생태하천의 정비		버스터미널 이전통합
KIFT문화거리 조성		KIFT문화거리 조성		국제연극문화타운 조성사업(아비뇽공원조성)
국제연극문화센터타운 조성사업(문화센터건립지)		사과테마파크 조성사업 (사과공원 및 시험장조성)		사과테마파크 조성사업 조감도 (사과공원 및 시험장조성)