3. 거창 스포츠파크 조성사업

사 업 목 적

군민의 스포츠 욕구 충족과 삶의 질 향상을 위하여 공설운동장

주변 일대를 웰빙형 스포츠 메카로 조성

사 업 개 요

위    치 : 거창군 거창읍 양평리 공설운동장 일대

사업기간 : 2005 ~ 2009년

부지면적 : 98,813㎡

사 업 량 : 공설운동장 신축 및 주변 체육시설ㆍ공원 조성

사 업 비 : 32,500백만원(국비14,458 도비7,246 군비10,796)

(단위 : 백만원)

재 원 별		총사업비	기 투 자	2008년도	2009년도	비 고
계		32,500	20,000	6,358	6,142
국 비(균특)		14,458	7,000	3,958	3,500
지방비	도비	7,246	4,625	1,000	1,621
	군비	10,796	8,375	1,400	1,021

추 진 상 황

2005. 4월 ~ 2006. 1월 : 대형공사 건설기술심의 및 입찰

2006.  3월 : 시설공사 착공

2007. 12월 : 주경기장 본부석 구조공사 완료

2008.  6월 : 다목적운동장 공사완료

2008. 12월 : 주경기장/주차장 주공종 공사완료

기계/소방, 전기/통신 주공종 공사완료

2009. 03월 : 주경기장 천연잔디 파종/진입도로 공사착공

2009. 06월 : 3차공사 준공

추 진 계 획

2009. 08월 : 주경기장 통합시운전, 전체공사 예비준공검사

2009. 09월 : 진입도로, 주변체육시설 및 공원시설 공사완료

2009. 10월 : 준공검사/시설물인계인수/행사개최

2009. 12월 : 사업완료

사 업 효 과

스포츠 인프라 확충으로 체육발전 도모와 삶의 질 향상에 기여

건강한 삶을 추구하는 현대인들의 스포츠 욕구 충족시켜주는 시설을 갖춤으로서 거창으로의 인구 유입을 유도

현 장 사 진

조 감 도