4. 복합문화단지 조성사업

실 태		사업비 증액(당초대비 25억원증)에 따른 사업계획변경 및 재설계로 사업지연

추진방향		문화관련 시설의 집적화로 문화예술인의 창작활동 및 공간 활용의 효율성 제고

사 업 개 요

위    치 : 거창읍 장팔리 5-1번지 일원(문화시설지구내)

사업기간 : 2005 ~ 2010년(계속비사업)

사 업 량 : 문화원사 및 무형문화재 전수회관, 부대시설 조성

- 문화원사 : 1,214.7㎡(사무실, 자료실, 회의실, 공연장 등)

- 전통문화전수회관 : 821.1㎡(연습실, 회의실, 사무실, 야외공연장,

체험장 조성 등)

사 업 비 : 78억원(국비 20억, 도비 23억, 군비 35억)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기확보	2008년	2009년 이후	비 고
계	7,860	3,916	1,902	2,042
국 비	2,044	1,707	191	146
도 비	2,298	228	1,020	1,050
군 비	3,518	1,981	691	846

사업진행 현황

2004. 10월 : 공유재산 관리계획 승인

2005.  5월 : 경남도 투융자 승인

2006.  1월 : 부지 매입

2007.  8월 : 설계용역 완료

2007.  9월 : 도시건축과 업무이관

2007. 11월 : 부지 추가 매입(2필지 2,839㎡)

2008. 10월 : 공사 입찰 (새미래건축 - 창원소재)

2008. 12월 : 공사중지 통보

2009.  2월 : 재설계 발주

2009.  8월 : 재 설계 완료예정

2009.  8월 ~ 2010. 12월 : 사업추진 및 준공

조 감 도(문화원사)

조 감 도(전통문화 전수회관)

전경사진

복합문화단지 조성 예정지

(거창문화원사,전통문화전수회관)