5. 수승대 관광지 확장사업

실 태		수승대 일원의 부족한 주차장과 각종편의시설의 부족

추진방향		수승대 관광지의 확장으로 관광객의 편의도모

사 업 개 요

위    치 : 경남 거창군 위천면 황산리 수승대 상류지역

사업기간 : 2008년～2010년

사업규모 : 금회 확장계획 62,200㎡(총면적 297,479㎡)

다목적광장, 주차장, 오수처리장, 화장실 등

사 업 비 : 5,298백만원(국비 1,300,  도비 1,190, 군비 2,808)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기확보	2008년	2009년 이후	비 고
계	5,298	1,698	2,000	1,600	기확보:부지매입
국 비	1,300	-	500	800
도 비	1,190	-	950	240
군 비	2,808	1,698	550	560

사업진행 현황

2006. 12  : 관광지 조성계획승인

2007. 01 ~ 11 : 편입부지 매수완료

2008. 02월 ~ 2008. 11월 : 실시설계 및 사업착수에 따른 관련부서 협의

(실시계획 인가, 하천점용, 도로연결허가, 건축협의, 계약심사 등)

2009. 03월 ~ 2010. 09월 : 사업착수 및 준공

• 기반시설 : 상ㆍ하수도, 진입도로, 제방, 전기, 통신 등

• 건축공사 : 오수처리장, 취사장, 화장실, 부대시설 등

조 감 도

전경사진 및 위치도