7. 거창 생태공원 조성공사

실 태		◯ 철새도래 등 자연환경이 우수한 황강변이 자연생태 공간 으로 제 기능을 다하지 못하고 있음

추진방향		◯ 자연생태공원 조성으로 군민에게 자연학습의 기회를 제공 하여 자연의 중요성을 교육하는 장으로 활용

사 업 개 요

위    치 : 경남 거창군 거창읍 양평리 1239-110번지 일원

사업기간 : 2008. 2. ~ 2010. 6

사업규모 : 25,900㎡(꼬마잠자리동산, 수질정화습지, 연못 등)

사 업 비 : 2,438백만원(국비1,000, 도비500, 군비500, 수계기금 438)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기확보	2009년	2010년 이후	비 고
계	2,438	951	720	767
국 비	1,000	242	360	398
도 비	500	121	180	199
군 비	500	150	180	170
기 타	438	438	-	-

사업진행 현황

타당성조사 및 기본계획 용역 : 2006. 9

지방재정 투자심사 (군 자체 ) : 2007. 6

기본 및 실시설계 용역 착공 : 2008. 5

실시설계서 검수 : 2009. 5. 6

하천점용 허가(19,114㎡/9명) 영농손실 보상 : 2009. 5. 21

공사계약 심사 (경남도 원가심사) : 2009. 6. 5

공사 착공 : 2009. 6. 26

공사 준공(예정) : 2010. 6. 26

조 감 도

전경사진 및 위치도

잠자리동산 및 생태

연못(25,900㎡)

하수처리시설