10. 거창읍 소도읍육성 사업

실 태		거창읍 강남지구 도시,문화시설물 개발 미비

추진방향		강남시가지 공사외 2개분야 사업을 통한 균형적 발전

사 업 개 요

위    치 : 거창군 거창읍 일원

사 업 량 : 강남시가지정비외 2개 영역에 8개 단위사업

사 업 비 : 277억원(국비50 ,교부세50 도비30, 군비107기타 40)

사업기간 : 2006년~2009년(4개년)

사업내용

구 분	세부사업명	사 업 량	비고
사과테마파크조성사업	- 사과공원조성 및 시험장	A =100,000㎡
국제연극 문화타운 조성사업	- 국제연극문화타운 조성사업 - KIFT문화거리조성 - 웅곡천변 공원 조성	A=50,800㎡ L=0.63㎞, A=1,300㎡
강남시가지 정비사업	- 5교교량 및 접속도로 - 서흥여객 자동차터미널 이전 및 통합건설 - 웅곡 생태하천 정비	L=100m , L=481m A=2,522㎡, A=32,747㎡

연차별 사업투자 계획

사 업 명	사업량	사업비(백만원)					비 고
		계	‘07까지	‘08년도	‘09년도	이후
계		27,700	7,600	8,150	11,950
실시설계용역	1식	800	800				‘06.12~’07.09
사과테마파크 조성사업	A=100,000㎡	5,300	5,040		260		‘07.01~’09.12
국제연극타운 조성사업	A=55,779㎡ L=1.2㎞	10,800	840	850	9,110		‘07.01~’09.12
강남시가지 정비 사업	A=35,269㎡ 교량L=100m 도로L=481m	10,800	920	7,300	2,580		‘07.01~’09.12

사업진행 현황

‘06. 08. 30 : 웅곡공원 조성부지 토지 및 지장물 보상완료

- 토지(김천리 363-4번지외 6필지)

- 지장물(김천리 361번지외 4건)

‘06. 09. 08 : 국고보조금 및 군비 1회 추경시 용역비 8억 확보

‘06. 11. 16 : 용역(PQ)사업수행 능력평가서 심사 의뢰

‘06. 11. 28 : 거창읍 소도읍육성사업 기본 및 실시설계용역 조달청 의뢰

‘07. 01. 26 : 거창읍 소도읍육성사업 용역 발주

‘07. 06. 10 : 사과테마파크 조성 공사 편입부지 감정의뢰(가람․삼창․중앙)

- 토지 136필지 (119,043㎡)

- 지장물 : 대평리769-1번지외 24필지 묘지(430기)

정장리 416번지 주택외 (65종)

‘07. 07. 03 : 소도읍육성사업 1차 용역 기본안 검토

‘07. 08. 13 : 용역 기본안 결정 및 관계부서 협의

‘07. 11. 20 : 소도읍육성사업 기본 및 실시설계 용역 완료

‘07. 06. 10 ~ ’08. 현재 : 사과테마파크 조성 공사 편입부지 보상협의

- 토지 62필지중 보상완료 37필지, 미보상 25필지(김옥이외8명)

- 지장물 : 대평리769-1번지외 24필지 묘지(182기)

정장리 416번지 주택외 (65종)

‘07. 11 ~ ’08. 05: 국제연극문화타운 편입부지 보상협의 완료

- 토지 : 장팔리 7번지외 1필지(2,839㎡)

- 지장물 : 장팔리 7번지 주택외 15종

‘08. 02. 25~ 현재 : 강남시가지정비 사업 편입부지 보상금 지급

- 토지 송정리 184-20번지외37필지 (3,975㎡)

- 지장물 : 송정리 229-1번지 주택외 279건

※ 토지 및 지장물 1건 미 보상 (송정리 229-10번지 변만이)

- 보상 협의 금액 : 2,450백만원

‘08. 03 ~ ’08. 07. 24 : 사업시행을 위한 관련 부서 협의

(하천점용 및 공작물 설치 , 도로점용, 사전재해영향성 평가등)

2008. 08. 08 : 강남시가지정비 전기 공사(거제소재 동아전기)

- 사업량 : 경관조명 1식 , 가로등주 55주 , 공원등주 10주

- 사업비 : 총사업비 786백만원(도급액 377, 관급액 409)

2008.08.18 : 강남시가지정비 착공 (창원소재 원광건설)⇒토목부분

- 위 치 : 거창읍 송정리, 상림리지내

- 사업량 : 교량 L=100m , B=20m

접속도로 L=468m , B=20m

- 사업비 : 총사업비 5,859백만원(도급액 4,693 , 관급액 1,166)

2008. 08. 21 : 강남시가지 정비 폐기물처리용역(사천소재 자원개발)

- 사업량 : 폐아스콘 1,252TON , 폐콘크리트 5,340TON , 건축 745TON

- 사업비 : 169 백만원

청소년(웅곡천변 공원) 문화공간 사업추진

- 위 치 : 거창읍 김천리 지내

- 사업량 : 공원조성 A=1,300㎡

- 사업비 : 총사업비2,030백만원

(공사비 300백만원, 보상비 1,650백만원, 지장물철거 및 처리 80백만원)

※  - 공원조성을 위한 기본 및 실시설계완료

- 현재 예산부족으로 인하여 지장물철거 및 폐기물처리 만 발주

웅곡천변 공원 조성 부지 토지 보상 및 지장물 보상 완료

- 토지 13필지 , 지장물 50건 (1,650백만원)

※ 토지 및 지장물 보상완료 (영업권 보상 1건 미 협의) ⇒백초야식

2008.08.08~18 : 웅곡천공원 지장물철거 및 폐기물 처리용역 계약

- 지장물(햠양소재 남양기업) , 폐기물 용역 (산청소재 일신환경)

2008 .09. 30 : 시공측량 완료 및 주변(한전,가로수,통신등) 처리

2008. 10. 10 : 강남시가지 정비사업 철거시 발생한 석면 처리에

따른 노동청 신고 및 철거를 위한 가시설 설치중

2009. 03 : 웅곡공원 철거 작업 완료

2009. 05 : 강남시가지 정비 접속도로 공사 시행

2009. 06 : 웅곡생태하천 정비 공사 사업 발주

- 밀양 소재 (주)부경

2009. 06 : 문화의거리 입찰공고 중

전경사진 및 위치도

시월교 및 접속도로 건설

버스터미널 이전통합

KIFT문화거리 조성

아비뇽 공원조성

웅곡천생태하천의 정비

사과테마파크 및

사과실험장(고제면)

국제연극문화센터의 건립

시월교 및 접속도로 건설		웅곡천생태하천의 정비		버스터미널 이전통합
KIFT문화거리 조성		KIFT문화거리 조성		국제연극문화타운 조성사업(아비뇽공원조성)
국제연극문화센터타운 조성사업(문화센터건립지)		사과테마파크 조성사업 (사과공원 및 시험장조성)		사과테마파크 조성사업 조감도 (사과공원 및 시험장조성)