13. 가축분뇨 공동자원화시설 설치

실 태		가축분뇨의 육상처리기반 미비로 양돈분뇨 연간 24천톤 해양배출

추진방향		해양배출 양돈농가에 대한 육상에서의 체계적 처리기반 구축

사 업 개 요

사업대상자 : 북부농협

위    치 : 웅양면 신촌리 384

사업기간 : 2008년～2009년

사업규모 : 건축면적 1,870.51㎡, 퇴비화시설 40톤/일, 액비화시설 60톤/일

사업비 : 27억원(국비 8.3억,도비 1.7억,군비 4억,융자 12.5억,자담 0.4억)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기확보	2008년	2009년 이후	비 고
계	2,700	-	2,500	200
국 비	830	-	750	80
도 비	174	-	150	24
군 비	406	-	350	56
융 자	1,250	-	1,250	-
자 담	40	-	-	40

사업진행 현황

가축분뇨 공동자원화 공법 선정	: 2008. 5. 30일

사업장 부지 확보	: 2008. 10. 2일

인․허가 완료	: 2008. 12. 3일

토목․건축 공사 착공	: 2009. 1. 8일

토목․건축 공사 완료	: 2009. 6. 26일

퇴․액비화 내부시설 설치	: 2009. 7. 20일 예정

공동자원화시설 시험가동	: 2009. 8. 22일 예정

2009년 9월 초 정상 운영 예정

전경사진

위치도

가축분뇨

공동자원화시설