14. 거창 사과테마파크 조성사업

실 태		공원기능 사과테마파크 조성사업 문화재 발굴조사 진행중

추진방향		거창사과의 교육, 홍보, 판매등 종합기능을 담당하는 최고 의 사과메카로 조성

❏ 사 업 개 요

❍ 위    치

- 체험기능 : 거창군 고제면 봉계리 산126-4번지 일원

- 공원기능 : 거창군 거창읍 정장리 819-3번지 일원

❍ 사업규모

- 체험기능 : 74,208㎡(사과체험장 1.51ha, 쉼터1.4ha, 학습장 등)

- 공원기능 : 93,921㎡(사과관, 품종전시포, 축제광장 등)

❍ 사업기간 : 2005년 ～ 20010년

❍ 사 업 비 : 6,200백만원(국비 2,080, 도비 570, 군비 3,549)

(단위 : 백만원)

연도	총사업비	국 비	도 비	군 비	비 고
계	6,200	2,080	570	3,549
2005년	600	300	90	210
2006년	1,700	600	180	920
2007년	1,360	680	204	476
2008년	420	-	-	420
2009년	2,120	500	96	1,523

❏ 사업추진상황

❍ 공통

- 경상남도 투.융자 심사 2005. 5

- 기본계획 및 타당성 조사 2005. 12

- 공유재산관리 승인 2007. 2

❍ 체험기능 사과테마파크

- 용지보상 완료 2007. 7

- 농어촌관광휴양단지 지정 2007. 8

- 농어촌관광휴양단지 개발사업계획 승인 2007. 10

- 시공사 선정 및 계약 2008. 1

- 체험기능 공사 2008. 2 ~ 2009. 4

- 체험기능 공사 준공검사 2009. 5

- 체험장 위탁관리 단체 지정(생명두레문화교육원) 2009. 4

❍ 공원기능 사과테마파크

- 토지 및 지장물 등 보상협의(도시건축과) 2007. 9 ~

- 진입도로 편입부지 보상협의(농업기술센터) 2008. 8 ~

- 사전재해영향성검토 협의 완료 2008. 10

- 분묘개장공고 : 1차 2008. 9, 2차 2008. 10

- 문화재 1차 시굴조사 완료 2008. 11

- 정장근린공원 조성계획 결정 2009. 3

❏ 향후계획

❍ 체험기능 사과테마파크

- 사과 및 오미자체험장 재배관리

- 집중호우 대비 사전 시설관리

- 내방 견학팀 안내

- 사과관련행사 (사과꽃나들이, 사과체험, 아시아 1인극제)

❍ 공원기능 사과테마파크

- 토지 및 지장물 보상(도시건축과, 농업기술센터)

- 실시설계 용역완료 2009. 7

- 도시계획시설의 실시계획인가 절차 이행 2009. 7

- 문화재 시굴조사 완료 2009. 9

- 시공사 선정 및 공사 착공 : 2009년 하반기

❏ 조 감 도

❏ 전경사진 및 위치도