15. 거점 산지유통센터 건립

목 적		◈ 과실 주산지역에 규모화․현대화된 산지유통시설(APC)을 설치 하여 기존 유통시설의 중심축(HUB)으로 육성 ◈ 농산물 물류효율화와 규모화로 유통체계 개선 및 물류비용 절감

사 업 개 요

위    치 : 거창군 거창읍 대평리 1347번지 일원

사업기간 : 2006년～2009년

사업규모

- 부지면적 : 조성면적 40,319㎡(총 부지면적 : 60,280㎡)

- 건축연면적 : 8,219㎡(지상 2층, 건축면적 6,477㎡)

․ 저온저장고 : 1,780㎡, 1,440톤 저장

- 선별시설 : 172,800개/8시간(50톤), 자유이송 접시식(33등급선별)

사 업 비 : 197억원(기금 77억, 도비 31억, 군비 89억)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기확보	2008년	2009년 이후	비 고
계	19,748	18,630	-	1,118
국 비(기금)	7,750	7,750	-	-
도 비	3,100	3,100	-	-
군 비	8,898	7,780	-	1,118

사업진행 현황

2006년  7월 거점산지유통센터 사업확정(농림부)

2007년  6월 용지보상 완료

2007년  7월 일괄입찰안내서 작성완료

2007년 11월 공사입찰공고(조달청)

2008년  4월 기본설계 심의 및 평가(도 기술심의회)

2008년  4월 실시설계 적격업체 선정(조달청)

2008년  8월 실시설계 적격심의(설계자문위원회)

2008년  9월부터 공사를 시작하여 2009년 8월말까지 완료 계획

2009년 10월 개장식 예정

조 감 도

전경사진 및 위치도