5. 죽전도시숲(근린공원) 조성사업

실 태		군민의 건강과 정서생활 향상에 기여할 공원조성이 요구됨

추진방향		도심속 군민휴식공간 제공을 통한 삶의 질 향상

사업개요

위    치 : 거창군 거창읍 가지리 255-2번지 일원

사업기간 : 2008년 ~ 2010년

사업규모 : 근린공원 조성 56,380㎡

총사업비 : 9,010백만원(균특700, 도비210, 군비 7,400, 기금700)

(단위 : 백만원)

구 분	합계	조경	토목	전기외5종	토지보상
총사업비	9,010	4,062	1,507	603	2,838
도 급 액	7,480	3,329	710	603	2,838
관 급 액	1,530	733	799

사업시공자

- 조경 : 진주시 소재 성림조경(주)

- 토목 : 합천읍 소재 (주)대암

사업진행 현황

토지 및 지장물건에 대한 보상계획 공고 및 감정평가 ---  ‘08. 8월

사업부지내 분묘 개장공고 --------------------------------- ‘08. 10월

편입토지 및 지장물건에 대한 보상협의 -  ‘08.11월 ~ ’09.1월

도시계획시설사업 인가 신청 ----------------------------- ‘09.  4월

매장 문화재 시굴 및 발굴조사 ----------- ‘09. 6월 ~ ’09. 11월

사업시행 -------------------------------------------------------- ‘09.  6월

향후 추진계획

공원조성계획 변경 및 도시계획시설변경 --------------- ‘10. 7월

공원명칭 공모등  ---------------------------------------------- ‘10. 8월

준공 ---------------------------------------------------------------- ‘10. 9월

조 감 도

위 치 도