7. 가조 석강 제2농공단지조성

실 태		산업용지 부족으로 기업유치애로

추진방향		고속도로 IC와 가깝고 기업인이 선호하는 석강농공단지 확장

사업개요

위    치 : 경상남도 거창군 가조면 석강리 일원

사업기간 : 2007년 ~ 2011년

사업규모 : 42,297㎡

총사업비 : 3,272백만원(국비:890, 지방비:2,382)
(단위 : 백만원)

구 분	계	2009년까지	2010년	2010년 이후	비 고
계	3,272	883	920	1,469
국 비	890	50	371	469
도 비	64	64
군 비	2,318	769	549	1,000

사업시행자 : 거창군수

유 치  업 종 :  C10. 식료품제조업, C11. 음료제조업,

C24. 1차 금속제조업,  C25. 금속가공제품제조업

사업진행 현황

‘08.10.17 : 농공단지 지정 승인

‘08.12.15 : 조성사업 위ㆍ수탁협약/ 한국농촌공사 거창ㆍ함양지사

‘09.06.04 : 용지매수 및 지장물 협의 보상(실적 82%)

‘09.11.25 : 환경영향평가 본안협의 완료

‘10.05.04  : 실시계획 승인

‘10.06.08  : 문화재 발굴허가(문화재청⇒거창군)

‘10.06.15 : 계약심사요청(거창군⇒경상남도 계약심사과)

⇒심사승인 : ‘10.07.08(경상남도 계약심사과⇒거창군)

‘10. 8월 : 토지수용재결신청(거창군⇒경상남도)

‘10. 8월 : 사업발주(토목공사)

‘11. 12월 : 농공단지 준공 및 입주

위 치 도

전경사진

석강 제2농공단지