10. 거창 승강기산업밸리 조성

실 태		승강기는 기술집약적 생활필수 설비로써 글로벌 산업발전과 함께 성장 잠재력이 큰 산업이나 국내 산업기반은 취약

추진방향		기업과 대학, 연구소, 정부 및 지자체와 정부산하기관이 공동으로 인적․물적 자원을 거창에 집적화하여 상호연계와 협력을 통해 승강기 산업 육성

사업개요

위    치 : 경상남도 거창군 일원

사업기간 : 2008년 ~ 2015년(8년)

주요사업

【 1단계 : 2008 ~ 2012 】

- 승강기대학, 전문산업단지(10만평), 승강기R&D센터, 전문교육원

【 2단계 : 2013 ~ 2015 】

- 전문산업단지(25만평), 상설전시장, 물류센터, 컨벤션센터

소요사업비 : 231,100백만원

구 분	계	기확보	2010년	2011년	2012년 이후	비 고
계	231,100	9,980	22,180	39,600	159,340
국 비	93,900	500	4,300	14,360	74,740
도 비	22,000	-	6,180	5,100	10,720
군 비	74,700	8,980	6,000	7,230	52,490
기 타	40,500	500	5,700	12,910	21,390

사업 진행현황

‘08. 07. 28 : 한국폴리텍Ⅶ대학 거창캠퍼스 무상양도․양수 협약 체결

(학교법인 한국폴리텍 ⇔ 거창군)

‘08. 08. 05 : 거창승강기산업밸조성사업 업무 제휴 협약체결

(거창군 ⇒ 설립주체, 승관원 ⇒ 운영주체)

‘08. 12. 29 : 학교법인 한국승강기대학 설립허가(교과부)

‘09. 02. 02 : 승강기대학 시행협약 체결(군, 승관원, 학교법인)

‘09. 05.    : 거창승강기산업밸리 조성사업 마스터플랜 용역보고회

‘09. 05. 20~2010. 7 : 승강기전문산업단지 계획 용역

‘09. 08. 21 : 한국승강기대학 인가

‘10. 03. 02 : 한국승강기대학 개교

향후 계획

‘10. 08.    : R&D센터건립․운영 협약체결(경남도,거창군⇔경남TP, KTL)

‘10. 09~10 : 2011학년도 한국승강기대학 신입생 수시모집

‘10. 09.    : R&D센터건립 실행계획 수립 및 부지매입

‘10. 10.    : 승강기전문산업단지 착공 및 보상

‘10. 12.    : R&D센터 건립 착공

‘12. 12.    : 승강기전문산업단지 준공

기대 효과

2013

조 감 도

위 치 도

승강기산업단지