13. 거창 국민체육센터 건립 사업

실 태		다양한 스포츠활동 수요 충족을 위한 수영장 건립 필요성 증대

추진방향		소각장 폐열을 이용한 에너지 절약형 수영장 건립

사업개요

위    치 : 경상남도 거창군 거창읍 양평리 스포츠파크 내

사업기간 : 2008년 ~ 2010년

사업규모 : 수영장(25m 6레인), 탁구장, 부대시설 등

(지하 1층/지상2층, 연면적 2,526㎡)

총사업비 : 6,000백만원(진흥기금 3,000 국비 240 지방비 2,760)

(단위 : 백만원)

구 분		총사업비	2008년이전	2009년	2010년	비 고
계		6,000	2,350	3,150	500
국비(진흥기금)		3,240	1,500	1,500	240
지방비	도비	1,054	0	1,000	54
	군비	1,706	850	650	206

그간 추진 사항

‘06. 10월 : 국민체육센터 기금지원사업 협약체결(30억원)

‘07. 1월 ~ ’08. 9월 : 선진지 견학 및 건립 기본방향 결정

‘08. 10월 ~ 2009. 3월 : 기본 및 실시설계 용역

‘09. 6월 : 공사 착공 (현 공정 60%)

향후 추진 계획

‘10. 11월 : 관리ㆍ운영 방안 확정

‘10. 12월 : 시설공사 준공

‘11. 1월 ~ 3월 : 개장준비 및 개장

조 감 도

위 치 도