1. 거창군 청소년수련관 건립

실 태		원활한 사업추진을 위해 차질없는 예산확보 선행

추진방향		청소년을 위한 종합적인 문화 활동공간 확보

사업개요

위    치 : 경남 거창군ㆍ읍 가지리 271번지(죽전근린공원) 일원

사업기간 : 2009. 1 ~ 2012. 6

사 업 량 : 2,939.96㎡(지하1층 지상3층)

주요시설 : 청소년수련관, 방과후 아카데미, 청소년종합지원센터 등

사 업 비 : 6,208백만원(광특 3,520, 군비 2,688)

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비	연도별				비고
		2009	2010	2011	2012
계	6,208	500	800	2,267	2,641
광 특	3,520	300	500	1,400	1,320
도 비	-	-	-	-	-
군 비	2,688	200	300	867	1,321

사업진행 현황

청소년 수련관 건립계획(안) 수립 : 2008. 1

상반기 경상남도 재정 투.융자 심사 : 2008. 4. 28

공유재산 관리계획 승인 : 2009. 4. 20

수련관 건립 심의위원회 개최 : 2009. 6. 30

설계경기 공모 : 2009. 9. 14 ~ 12. 3

기본 및 실시설계 용역착공 : 2010. 1

문화재 현상변경 허가 : 2010. 8. 5

기본설계검토 자문위원회 심의(여성가족부) : 2010. 8. 31

기본 및 실시설계 용역완료 : 2010. 11. 15

착공(건축, 토목) : 2010. 12. 28 ~

전 공정 착공 : 2011. 4.

조 감 도

위 치 도