3. 거창 승강기R&D센터 건립

실 태		국내 승강기산업 육성 및 기술개발을 통한 기술 경쟁력 강화 필요

추진방향		산․학․관이 공동으로 투자․기술개발을 할 수 있는 R&D센터를 건립함으로써 승강기업체 핵심기술역량 강화

사업개요

위    치 : 거창군 남상면 거창승강기산업밸리 지구내

사업기간 : 2010년 ~ 2013년

주요시설 : 장비동, 기업지원센터동, 연구기술장비 구축 35종, 테스트타워

사업주체 : 경상남도(경남테크노파크)/한국산업기술시험원

총사업비 : 144억원(국비 92억원, 지방비 52억원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기확보	2011년	2012년	2013년 이후	비 고
계	14,400	2,200	3,250	6,250	2,700
국 비	9,200	1,000	2,500	3,000	2,700
도 비	2,600	200	-	2,400	-
군 비	2,600	1,000	750	850	-

사업진행 현황

2008. 10 : 승강기R&D센터 타당성 확보(경남발전연구원)

2009. 05 : 마스터플랜 수립(경상남도, 경남테크노파크)

2011. 01 : 거창승강기 R&D센터 건립을 위한 조직 구성

2011. 03 : R&D센터 건립 부지매입 계약체결

2011. 05 : R&D센터 건립․운영 협약체결(경남도,거창군⇔경남TP,KTL)

2011. 07 : 실시설계 용역 발주

향후 추진계획

2011. 10 : 장비구입

2011. 12 : 실시설계 완료

2011. 12 : 착공

2013. 12 : 준공

조 감 도

위 치 도