4. 거창 일반산업단지 조성

실 태		산업용지 부족으로 기업유치애로

추진방향		합천댐 상류의 특성을 고려한 청정 산업단지 조성

사업개요

위    치 : 경상남도 거창군 남상면 월평리, 대산리 일원

사업기간 : 2007년 ~ 2012년

사업규모 : 745,433㎡(산업시설:471,223㎡, 지원시설:22,009㎡, 공공시설:252,201㎡)

총사업비 : 60,117백만원(지방비:15,157, 민간:44,960)

(단위 : 백만원)

구 분	계	2010년까지	2011년	2012년 이후	비 고
계	60,117	36,330	13,837	9,950
국 비	-	-	-	-
도 비	10,000	7,000	1,000	2,000
군 비	5,157	4,753	-	404
민 자	44,960	24,577	12,837	7,546

사업시행자 : 거창산업단지(주) 대표이사 김영현

유 치  업 종 : 금속가공제품제조업(25), 식료품 제조업(10), 기타기계 및장비제조업(29), 비금속 광물 제조업(23), 목재 및 나무제품 제조업(16)

분양계획 : 471,223㎡(시행자 사용:224,598 일반분양:246,625㎡)

사업진행 현황

‘04. 03. 10 ~ ‘06. 11. 9 : 사업타당성 조사 및 기본 구상

‘07. 07. 05 : 산업단지 지정 고시,

‘08. 06. 11 : 토지 및 지장물건 보상개시

‘08. 06. 19 : 산업단지개발사업 변경 및 사업자 변경승인

【거창군⇒거창산업단지(주)】

‘08. 10. 17 ~‘10. 27 : 제영향평가(환경,교통,재해) 협의완료

‘08. 12. 29 : 문화재 시ㆍ발굴조사 허가(문화재청)

‘09. 04. 16 : 산업단지 실시계획 승인고시(경고2009-198호)

‘09. 04. 30 : 일반산업단지 착공(문화재 시ㆍ발굴 병행 실시)

‘09. 12. 31 : 손실보상 협의 추진(협의실적 : 협의율 100%)

‘10. 02. 05 : 문화재 시ㆍ발굴사업 완료

‘10. 12 : 분양,      ‘12. 04 : 일반산업단지 준공 및 입주

조 감 도

위 치 도