5. 가조 석강 제2농공단지 조성

실 태		산업용지 부족으로 기업유치애로

추진방향		고속도로 IC와 가깝고 기업인이 선호하는 석강농공단지 조성

사업개요

위    치 : 경상남도 거창군 가조면 석강리 일원

사업기간 : 2008년 ~ 2011년

사업규모 : 42,297㎡(산업시설:34,612㎡, 공공시설:3,653㎡, 녹지시설:4,032㎡)

총사업비 : 3,272백만원(국비:890, 지방비:2,382)

(단위 : 백만원)

구 분	계	2009년까지	2010년	2011년	비 고
계	3,272	883	920	1,469
국 비	890	50	371	469
도 비	64	64	-	-
군 비	2,318	769	549	1,000
민 자	-	-	-	-

사업시행자 : 공영개발(거창군수)

유 치  업 종 : 식료품제조업(10), 음료제조업(11), 1차금속제조업(24), 금속가공제품제조업(25)

사업진행 현황

‘08. 10. 17 : 농공단지 지정 승인

‘08. 12. 15 : 조성사업 위⋅수탁협약/한국농어촌공사 거창⋅함양지사

‘09. 11. 25 : 환경영향평가 협의(낙동강유역환경청)

‘10. 05. 04 : 실시계획승인 고시 및 지형도면 고시

‘10. 07. 19 : 문화재 시⋅발굴추진(경남발전연구원)

‘10. 10. 29 : 조성공사 발주

‘11. 02. ~ : 토지수용업무 추진

‘11. 07 : 문화재 발굴 완료

‘11. 11 : 관리기본계획 수립 및 분양

‘11. 12 : 농공단지 준공 및 입주

위 성 사 진

위 치 도