12. 곰내미권역 농촌마을종합개발

실 태		농촌개발사업으로 곰내미권역 종합개발사업 추진

추진방향		곰내미권역의 지역자원을 활용한 활력넘치는 권역 조성

사업개요

위    치 : 경상남도 거창군 웅양면 노현·동호·죽림·산포리 일원

사업기간 : 2009년 ~ 2013년(5년)

사업규모 : 2,093ha(농경지 485ha, 대지 30ha, 임야 1,500ha, 기타 78.2ha)

총사업비 : 72.5억원(국비 : 49억원, 지방비 21억원, 자부담 2.5억원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	2009년	2010년	2011년	2011년 이후	비 고
계	7,248	429	3,051	1,237	2,531
국 비	4,900	300	1,963	866	1,771
도 비	630	39	252	111	228
군 비	1,470	90	588	260	532
기 타	248	-	248	-	-

사업 시행자 : 한국농어촌공사 거창.함양지사 지사장 이종성

사 업 내 역 : 문화복지 3건, 소득기반 1건, 경관정비 4건, 농촌관광 2건, 지역역량강화 5건

시행 방안 : 5개년 사업기간중 2단계로 구분 시행

<1단계 3년(2009~2011), 2단계 2년(2012~2013)>

사업진행 현황

‘07. 10. 05 : 농촌마을종합개발사업 대상지 신청

‘08. 03. 03 : 농식품부 대상지 선정

‘08. 12. 11 : 기본계획수립

‘09. 01. 07 : 기본계획 승인(농식품부)

‘09. 06. 11 : 사업시행방안 결정

‘09. 10. 21 : 실시설계 완료

‘10. 08. 30 : 다목적회관 및 유통시설현대화사업 착공

‘11. 12. 31 : 1단계 사업 완료

‘12. 01. 01 : 2단계 사업 착수

‘13. 12. 31 : 사업 총괄 준공

위 치 도