2. 거창일반산업단지 공단폐수처리시설 공사

실 태		합천댐 상류 생태계 보존 및 공공수역의 수질 보전

추진방향		거창일반산업단지 업체 조기정착과 공장 정상 가동

사업개요

위    치 : 거창군 거창읍 양평리 1239-50번지 거창하수처리장 일원

사업기간 : 2010년 ~ 2012년 12월(1차), 2017년 12월(2차)

사업규모 : 오·폐수처리시설 Q=2,600㎥/일

총사업비 : 17,324백만원 (국비 13,681, 군비 3,643)

(단위:백만원)

단계별		계	1단계 사업				2단계 사업
폐수 발생원		2개소 연계	거창일반산업단지				농공단지
년도별		2009~2017	소 계	2011 까지	2012 확보	미확보	2016 이후
사업량		Q=2,600 ㎥/일	Q=1,300 ㎥/일	실시설계 착 공	공사중	1단계준공	Q=1,300 ㎥/일
사업비	계	17,324	13,214	5,163	3,933	4,118	4,110
	국 비	13,681	9,571	2,520	3,433	3,618	4,110
	지방비	3,643	3,643	2,643	500	500	0

사업진행 현황

‘10. 03 ~  : 오·폐수 관로매설 공사 시행

‘10. 06. 07 : 일반산업단지 폐수종말처리시설 변경 승인 (낙동강유역환경청)

‘10. 12. 08 : 실시설계 2차 보완자료 제출(환경부)

‘11. 06. 22 : 실시설계 승인(국비예산 확정) 통보(환경부)

‘11. 10. 12 : 사업 착공 (시공사 : 하동소재 세강종합건설)

‘12. 07. 31 : 사업진도 45%(처리동 1층 스라브타설 완료)

‘13. 06.    : 사업 완공

위 치 도