6. 가축분뇨공공처리시설 설치사업

실 태		가축분뇨 해양투기 금지로 인한 양돈농가 애로

추진방향		가축분뇨로 인한 환경오염 예방 및 농가의 경쟁력 강화

사업개요

위  치 : 거창읍 양평리 267-2번지 일원(하수종말처리시설 인근)

기  간 : 2008년 ~ 2013년 12월

규 모 ┌ 부지면적 : 9,904㎡

└ 사 업 량 : 95.0㎥/일

사업비 : 13,840백만원(국비 11,072, 기금 1,661, 지방비 1,107)

(단위 : 백만원)

구 분	계	2011년까지	2012년	2013년	비 고
계	13,840	557	10,560	2,723
국 비	11,072		8,800	2,272
도 비	550		440	110
군 비	557	557
기 금	1,661		1,320	341

사업시행자

- 토목, 건축, 기계, 조경 : (주)대건, GS건설(주)

- 전기, 수배전반, 계측제어 : 대창전기공업(주), (합)우성전기공업사

전체공정 : 4%(시공측량 및 벌개제근)

사업진행 현황

2008. 01. 30 : 기본계획 및 타당성조사 용역

2010. 10. 21 : 경상남도 투·융자 심사반영

2011. 08. 19 : 기본 및 실시설계 용역 업체선정⇒ (주) 삼안

2012. 10. 21 : 공법선정위원회 개최 및 공법결정(바이오메카⇒KHTS공법)

2012. 02. 02 : 거창군 가축분뇨공공처리시설 설치승인(경상남도)

2012. 03. 15 : 군계획위원회 개최 (지하 중회의실 ⇒ 원안가결)

2012. 04. 25 : 경상남도 지방건설기술심의 개최(조건부 가결)

2012. 06. 27 : 시공자 결정[토목,건축,기계,조경⇒(주)대건, 지에스건설]

[전기⇒대창전기공업(주),(합)우성전기공업사]

2012. 07. 05 : 건축허가 신청

2012. 07. 06 : 가축분뇨공공처리시설 착공계 제출

조 감 도

위 치 도