12. 보건기관 이전신축 및 의료서비스 개선사업

실 태		보건기관 이전신축 및 의료서비스 개선사업 필요

추진방향		농촌 보건기관의 시설 및 환경을 개선하여 양질의 의료서비스 제공

사업개요

위    치 : 거창군 거창읍, 위천면, 남상면, 고제면, 신원면 일원

사업기간 : 2011년 1월 ~ 2012년 3월

- 보건소 이전신축 : 2012. 1 ~ 2013. 12

- 의료서비스 개선 : 2011. 1. ~ 2012. 3.

사업규모

- 보건소 이전신축 : 연면적 2,200㎡(지하1층, 지상3층)

- 의료서비스 개선 :보건지소(336㎡ , 2층), 보건진료소(116㎡, 1층)

총사업비 : 10,230백만원(국 1,856, 도 178, 군 1,077)

(단위 : 백만원)

구 분	계	보건소 이전신축	의료서비스 개선사업				비고
			위천보건지소	진목보건진료소	개명보건진료소	대현보건진료소
계	10,230	8,264	808	386	386	386
국 비	1,856	1,145	351	120	120	120
도 비	178	286	88	30	30	30
군 비	1,077	6,833	369	236	236	236

사업진행 현황

‘11. 06. 17 : 개명보건진료소 착공

‘11. 06. 21 : 대현보건진료소 착공

‘11. 06. 23 : 위천면 보건지소 착공

‘11. 06. 24 : 진목보건진료소 착공

‘11. 12. 07 : 진목보건진료소 준공

‘11. 12. 09 : 대현보건진료소 준공

‘11. 12. 18 : 개명보건진료소 준공

‘12. 03. 31 : 위천면 보건지소 준공

‘12. 06. 05 : 거창군보건소 설계용역 공고 및 계약

향후계획

‘12. 09. : 보건소 보건복지부 기본설계 승인

‘12. 12. : 보건소 설계 준공

‘12. 12. : 보건소 공사 착공

‘13. 12. : 보건소 준공

보건지소 및 진료소

위천면보건지소	대현보건진료소
개명보건진료소	진목보건진료소

위치도

위천면보건지소	대현보건진료소
개명보건진료소	진목보건진료소