1. 거창군 장애인 근로사업장 건립

	목 적
• 지역특성에 맞는 장애인 일자리창출과 일을 통해 존재가치와 사회참여 • 저소득장애인의 자립능력배양 및 삶의 질 향상

사업개요

위    치 : 거창군 남상면 대산리 1546(일반산업길 160)

규    모 : 부지 6,611.6㎡, 공장 1,200㎡

사업내용 : 포장박스제조

고용규모 : 37명(장애인 30명)

사 업 비 : 2,554백만원(국 590, 도 297, 군 367, 아림포장 1,300)

사업추진상황

2010. 08. : 장애인근로사업장 기본계획 수립(공약사업)

2011. 03. ~ 08. : 장애인근로사업장 공모사업 선정(보건복지부)

2012. 06. 27 : 부지매입(607,328천원)

2012. 07. 04 ~ 08. 20 : 사업 참여기업 2회 공모

2012. 12. 18 : 투자계약(주.아림포장, 13억원, 고용창출 37명)

2013. 01. 02 : 건축공사 착공(588,021천원)

2013. 03. 15 : 거창한거창 통합농산물박스 사용 협약체결

거창군 ⇔ 농업인·생산자 단체 대표

2013. 05. 31 : 장애인근로사업장 준공, 기계설치, 공장등록

2013. 06. 03 : 공장 시험가동 제품생산

2013. 06. 12 : 근로사업장 운영조례 공포, 운영법인 모집 공고

2013. 06. 30 : 수주현황 = 315,000장 / 320,200천원

향후추진계획

2013. 07. 05 : 수탁자 선정 위원회 개최

2013. 07. 중순 : 위·수탁 계약체결

2013. 08. 초순 : 근로사업장 개소 예정

기대효과

장애인의 자립능력 배양과 사회참여 기회 제공

지역 일자리 창출과 경기 활성화 기여

전경사진

위 치 도

거창군장애인근로사업장