3. 거창 승강기 R&D센터 건립

	목 적
• 승강기제품의 연구개발 및 제조 과정의 전 공정을 One-Stop으로 기술지원 할 수 있는 종합 허브기능 구축 •「거창승강기밸리」투자업체 기술 경쟁력 향상 도모

사업개요

위    치 : 경상남도 거창군 남상면 거창일반산업단지 내

사업기간 : 2010. 1. ~ 2013. 12.

사업규모 : 부지 16,531.6㎡, 연건평 4,099㎡(기업지원동 2,434㎡, 장비동

1,665㎡), 장비구축(100m 테스트타워 외 30여종)

총사업비 : 16,100백만원(국비 9,200, 도비 2,600, 군비 4,300)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2012년	2013년 이후	비 고
계	16,100	6,950	3,440	5,710
국 비	9,200	3,500	500	5,200
도 비	2,600	200	2,250	150
군 비	4,300	3,250	690	360

현 공 정 : 승강기센터(기업지원동, 장비동) 90%, 테스트타워 86%

사업주체(운영) : 경상남도(경남테크노파크/한국산업기술시험원)

사업추진상황

2009. 05. : 마스터플랜 수립(경상남도/경남TP)

2009. 12. : 국비(광특) 지원사업 확정

2010. 12. : 승강기R&D센터 건립사업 협약체결

2012. 05. : 승강기R&D센터 착공

2013. 06. : 제2단계 승강기R&D센터 사업확장을 위한 예산 98억원

(국비54, 도비18, 군비18, 기타8) 지원 요청(산업통상자원부)

2013. 06. : KTL 안산 승강기센터 내 장비이전 사업비 25억원(국비15,

도비5, 군비5) 지원 요청(산업통상자원부)

향후 추진계획

2013. 09. : 승강기R&D센터 준공 및 개원

- 준공식 : 승강기밸리 선도기업체(23개사 중 10개사) 준공식과 병행 추진

- 운  영 : 2실 5팀 9명(장비 지원, 시험평가 지원, 제품인증획득 지원,

신제품 연구기술개발 등)

2014. 04. ~ : KTL 안산센터의 승강기 시험․인증장비 이전(31종)

2014. 04. ~ : 2014년도 사업비로 장비보강(시험기기, 승강기방화도어

시험장치, 승강기설계 해석용 S/W)

2015년 ~ : 신제품 및 수출전략품목 Pilot 생산지원설비 구축, 마케팅 지원

기대효과

「산․학․연․관」연계에 의한 고품질 승강기 부품 개발 및 종합시험․       인증 인프라 구축

국내․외 승강기업체 집적화 유도로 거창을 승강기 허브도시로 육성

조 감 도

위 치 도