4. 거창읍 창조거리 조성

	목 적
• 침체된 시장거리를 되살리기 위한 다양한 도시재생 프로그램 도입 필요 • 지역내 내재자원을 활용한 문화, 스토리, 상권이 결합된 테마거리 조성

사업개요

사업위치 : 거창읍 중앙리 시장길 일원

사업내용 : L=440m(보·차도 정비 및 간판디자인 정비 등)

사업기간 : 2011. 06. ~ 2013. 12.

사 업 비 : 1,800백만원(특교 400, 군비 1,400)

※ 전선지중화사업 : 1,175백만원(도시건축과 예산)

사 업 명	사업 기간	사 업 량	사업비(백만원)			비고
			계	특교세	군비
계			2,975	400	2,575
간판디자인 및 제작․설치사업	‘12.05~ ‘13.05	간판(130개) 교체, 파사드정비(벽면·전선정비)등	480		480	완료
전선지중화 사업	‘12.11~ ’13.07	전선지중화1식, L=440m 개폐기3, 변압기3	1,175		1,175	도시건축과
창조거리 생활형 공공디자인 조성사업	‘12.02~ ‘13.12	보·차도 및 편의시설 정비	1,320	400	920

사업추진상황

[간판디자인 제작설치사업]

2012. 03. : 입찰공고(조달청)

2012. 05 : 사업계약(제일애드컴)

2012. 09. / 12. : 간판디자인 사업 보고회

2013. 02. : 간판제작 게시

2013. 03. : 정비시범구역 지정고시

2013. 05. : 간판디자인 제작설치사업 완료

[보·차도 정비사업 / 전선지중화사업]

2011. 05. : 안전행정부 생활형 공공디자인 조성사업 공모 당선

2012. 01. : 기본 및 실시설계 용역 완료

2012. 04. : 입찰 공고

2012. 08. : 계약 체결

2013. 03. ~ : 전선지중화(주관로 매설완료) ⇒ 통신선로 시공중

향후추진계획

2013. 08. : 전선지중화사업 완료 ⇒ 보·차도정비사업 착공

2013. 10. : 보·차도 정비사업 완료

2013. 11. : 기반시설 정비 후 문화거리 시범운영

기대효과

걷고 싶은 거리 조성으로 주민 삶의 질 향상과 도시 경쟁력 제고

창조적 공간 연출로 아름다운 도시미관 및 안전하고 쾌적한 도시 조성

조 감 도

위 치 도