5. 거창 일반산업단지 조성

	목 적
• 합천댐 상류의 특성을 고려한 무공해 환경 청정산업단지 조성 • 낙후된 서북부 경남의 지형균형 발전을 통한 지역경제 발전 도모

사업개요

위    치 : 경상남도 거창군 남상면 월평리, 대산리 일원

사업기간 : 2007년 ~ 2012년

사업규모 : 740,754㎡(산업시설:464,564㎡, 지원시설:21,978㎡, 공공시설:254,212㎡)

총사업비 : 60,185백만원(지방비 15,825, 민간 44,360)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2012년	2013년 이후	비 고
계	60,185	36,330	22,837	10,018
도 비	10,000	7,000	10,000	2,000
군 비	5,825	4,753	-	1,072
민 자	44,360	24,577	12,837	6,946

사업시행자 : 거창산업단지(주) 대표이사 김영현

유치업종 : 금속가공제품제조업(25), 식료품 제조업(10), 기타기계 및

장비제조업(29), 목재 및 나무제품 제조업(16)등

분양계획 : 464,564㎡(시행자 사용:217,639㎡ 일반분양:246,625㎡)

사업추진상황

‘09. 04. 30 : 일반산업단지 착공(문화재 시ㆍ발굴 병행 실시)

‘09. 12. 31 : 손실보상 협의 추진(협의실적 : 협의율 100%)

‘10. 02. 05 : 문화재 시ㆍ발굴사업 완료

‘10. 12. 15 : 분양계획 공고

‘11. 01. 05 : 산업단지 분양 실시

‘12. 05. 15 : 단지 내 시설물공사 준공(감리단 : 천진엔지니어링)

‘12. 09. 25 : 거창일반산업단지 계획(변경)승인 및 지형도면 고시

‘12. 09. 28 : 공공시설물 인수인계를 위한 합동점검 완료

⇒ 거창산업단지(주), 경제과, 상하수도사업소

‘12. 10. 18 : 거창일반산업단지 조성사업 준공신청서 제출

〈거창산업단지(주) ⇒ 군 ⇒ 경상남도〉

‘12. 11. 15 : 거창일반산업단지 사업 준공

향후추진계획

‘13. 06. ~ 12. : 사업비정산 및 SPC해체

⇒ 미 분양 토지 지속적인 분양 촉구 및 건축 독려

산업단지 분양 현황

분양 대상 : 500,320㎡(151,347평→산업 448,032㎡, 연구 16,532㎡, 지원 35,756㎡)

⇒ 일반분양 282,413㎡(85,430평), 실수요 분양 217,907㎡(65,917평)

분양(‘13.05.현재-실소유자분 포함) : 35개업체 389,470㎡(117,814평, 77.8%)

미분양 현황

용도별	필지수	면적		비고
계	9	110,854㎡	(33,534평)
펄프종이 및 종이제품	1	4,861㎡	( 1,471평)	1546번지
기타 기계 및 장비	4	32,242㎡	( 9,753평)	1551, 1575, 1576, 1583번지 (9,685) (9,302) (9,952) (3,303 ㎡)
지원시설 (일반)	2	21,978㎡	( 6,648평)	1565, 1567번지
지원시설(폐기물처리)	1	13,778㎡	( 4,168평)	1550번지
식료품	1	37,995㎡	(11,494평)	1599번지 (37,995 ㎡)

※ 실수요자분 8~10월경 사업 착공 예정

기대효과

신규 공장건립 및 가동에 따른 지역 주민 일자리 창출 효과

대형 산업단지 조성을 통한 지역 경제 활성화

조 감 도

위 치 도