6. 거창 국민여가캠핑장 조성

	목 적
• 주 5일 근무 및 가족단위의 체류형 관광수요창출에 따른 인프라를 구축하여 관광객유치 및 지역경제 활성화에 기여

사업개요

위    치 : 거창군 북상면 월성리 1608번지(월성청소년수련원 내)

사업기간 : 2011년 ~ 2013년

사업규모 : 9,600㎡(캐빈하우스 4동, 방갈로 3동, 텐트장 9개소, 진입도로 237m,                 방문자센터 1동, 야외화장실 1동, 공동취사장 및 샤워장 1동)

총사업비 : 2,070백만원(기금 1,000 지방비 1,070)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2012년	2013년 이후	비 고
계	2,070	850	1,370	(2012년이월예산)
기 금	1,000	500	500	-
도 비	300	150	300	-
군 비	770	200	570	-

사업추진상황

‘97. 10. : 공공용지입지 승인(국토이용관리법제20조 등)

‘02. 02. : 월성청소년수련원 운영(‘흥사단’ 위탁)

‘11. 10. : 관련부서 협의(계약심사 / 건축허가 등)

‘11. 11. : 사업 착공

‘12. 10. : 캐빈하우스 설치공사 착공(4동)

‘13. 01. : 시공사 부도로 계약해지

‘13. 06. : 캐빈하우스 설치공사 준공(4동)

‘13. 07. : 건설공제조합과 사업비 타절 및 정산

향후추진계획

‘13. 07. : 잔여사업분 실시설계용역

‘13. 09. : 잔여사업분 사업 착공

‘13. 11. : 국민여가 캠핑장 물품 구입 등

‘13. 12. : 사업 준공

‘14. 02. : 청소년수련원 연계 운영

기대효과

다양한 종류의 캠핑장(야영장시설)의 확충으로 관광객에 대한 편의 제공

가족단위 사계절 체류형 관광객 유치로 관광수입 증대

관광산업 육성으로 지역경제 활성화 기여

조 감 도

위 치 도