7. 거창 친환경 대중골프장 조성

	목 적
• 골프인구의 증가와 대중화에 따른 국민생활체육 참여기회 확대와 지역주민 소득증대 및 지역경제 활성화를 기하기 위함

사업개요

위    치 : 거창군 가조면 도리·석강리 일원

사업기간 : 2009년 ~ 2014년(5년간)

사업규모 : 9홀 규모(573,130㎡)

총사업비 : 26,428백만원(체육진흥공단 15,000, 군비 11,428)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2012년	2013년 이후	비 고
계	26,428	5,642	2,340	18,446
기 금	15,000	2,712	370	11,918
군 비	11,428	2,930	1,970	6,528

사업시행자 : 서울올림픽기념 국민체육진흥공단, 거창군

사업추진상황

‘08. 12. 02 : 협약체결(공단 ⇔ 거창군)

‘10. 03. 10 : 군관리계획(변경)입안 (거창군)

‘10. 12. 09 : 거창군관리계획(체육시설) 결정(변경) 지형도면 고시

‘11. 08. 08 : 사업시행자 지정 고시

‘11. 08. 26 : 사업추진계획 보고(공단 ⇒ 거창군)

‘12. 01. 11 : 실시계획인가 고시

‘12. 01. 25 : 보상계획 재공고

‘12. 02. 17 : 문화재 시굴조사

‘12. 02. 21 : 분묘개장 공고(1차)

‘12. 03. 26 : 분묘개장 공고(2차)

‘12. 06. 04 : 총사업비 협의(22,384백만원/공단15,000 거창군7,384)

‘12. 07. 27 : 책임감리용역 착수【(주)선진엔지니어링】

‘12. 09. 28 : 사업 착공(삼화, 혜성, DK 건설 / 분담이행)

향후추진계획

‘13. 08. : 토지수용 재결신청

‘13. 09. : 토지수용 및 공탁

‘14. 11. : 준공(예정)

기대효과

거창관광 활력화, 지역주민 소득증대 및 경제 활성화 도모

골프의 대중화시대 대비, 군민체육활동 참여기회 확대

조 감 도

위 치 도

친환경

골프장조성