11. 고제~무풍 국도 건설공사

	목 적
• 덕유산 주변의 친환경적인 관광벨트 형성으로 영․호남 지역발전과 관광 활성화 기여 • 무주와 거창을 연결하는 국도37호선의 급커브, 급경사로 교통사고 위험 해소를 위한 조기완공이 시급함

사업개요

위    치 : 거창군 고제면 개명리 ~ 무주군 무풍면 삼거리

사 업 량 : L=5.4km(신설2.5km, 선형개량2.9km), B=9.5m(2차로)

사업기간 : 2008. 04. ~ 2015. 03.   ※ 2013. 10월말 조기준공예정

총사업비 : 31,516백만원

(단위:백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013년	비 고
합 계	31,516	26,514	5,002
공 사 비	29,774	25,068	4,706
보 상 비	1,722	1,446	276	이월금
기타(한전)	20		20	이월금

※ 공사 진도 : 98%

사업추진상황

2008. 04.    : 착   공

2011. 07. 14 : 터널관통

2012. 08. 12 : 터널라이닝 완료

향후추진계획

2013년 하반기 개통