15. 거창 푸드 종합센터 건립

	목 적
• 우리지역 농산물을 한곳에서 볼 수 있는 홍보·전시·판매체계 구축 • 농산물 수집·선별·유통 등 복합기능을 수행할 수 있는 시설물 설치

사업개요

위    치 : 거창군 거창읍 대평리 1347번지 APC부지내

사업기간 : 2012. 03. ~ 2013. 09.

공사내용 : 직판장 및 선별·저장시설 건립 1동

사업규모 : 지상 2층, 연면적 712.5㎡(1층 532.5㎡, 2층 180㎡)

총사업비 : 1,380백만원(도비 570, 군비 810)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2012년	2013년 이후	비 고
계	1,380	280	1,100	(2012년이월예산)
도 비	570	70	500
군 비	810	210	600

사업시행자 : 거창군

사업추진상황

2012. 03. : 로컬푸드관련 강원도 원주시, 횡성군 벤치마킹

2012. 03. : 선진농촌 해외연수(프랑스, 독일, 일본)

2012. 09. : 건축디자인 결정을 위한 조감도 작성 의뢰

2012. 10. ~ 11. : 디자인 확정 및 실시설계 용역

2012. 10. : 거창군 푸드육성 및 지원조례·규칙 입법예고

2012. 12. : 거창푸드종합센터(건축, 설비) 계약 및 착공

2013. 02. : 거창푸드종합센터 전기·통신·소방 계약 및 착공

2013. 05. : 거창푸드산업 육성 및 지원에 관한 조례·규칙 공포

향후추진계획

2013. 08월 : 거창푸드종합센터 준공(7월초 : 현공정율 80%)

2013. 09월 : 각종 인허가 완료 및 등기절차 이행

기대효과

소량·다품목 농산물의 안정적인 유통망 확보로 선진 유통문화 창출

거창푸드종합센터를 축으로 하는 2단계 이하 유통체계 구축

조 감 도

위 치 도