17. 거창 실버레포츠타운 조성사업

	목 적
• 위천천 둔치 소재 노인체육시설 수용과 각종 대회를 유치할 수 있는 다기능적인 체육시설 갖추는 등 스포츠메카로 육성 • 주변 악취 발생시설 편입으로 쾌적한 운동여건 조성

사업개요

위    치 : 거창군 거창읍 양평리 1125번지 일원

사업기간 : 2010년 ~ 2014년

사업규모 : 44,839㎡(다목적 운동장, 파크골프장, 그라운드 골프장, 씨름장 등)

총사업비 : 8,000백만원(국비 2,460, 도비 1,000, 군비 4,540)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 확보계획
		기투자	2012년	2013년	2014년
계	8,000	3,660	2,500	1,180	660
국비(광특)	1,960	-	500	800	660
도 비	1,000	-	1,000	-
군 비	4,540	3,660	500	380
특별교부세	500	-	500	-

사업추진상황

2010. 03. : 실버레포츠타운 조성사업 기본계획 수립

2010. 05. ~ 12. : 편입토지 및 지장물 보상

2012. 02. : 문화재 시굴조사

2012. 06. : 군관리계획(용도지역/체육시설) 결정(변경)

2012. 10. ~ 2013. 05. : 실시설계용역, 소규모환경영향평가 협의완료

2013. 05. : 실시계획인가 신청

향후추진계획

2013. 08. : 실시계획인가 완료

2013. 09. ~ 2014. 12. : 공사 착공 및 준공

기대효과

늘어나는 고령층 인구와 노인 건강 증진을 위한 노인체육시설 확충하여       쾌적한 운동여건 조성

계 획 도